도시건설	1호광장 ~ 서울병원 간 도로 구조 개선사업		담당부서
134
			건설과

	최종목표
교통사고 잦은 곳 개선사업으로 `1호광장~서울병원 사거리`(L=1.2km) 구간이 선정됨에 따라 도로 구조 개선 등을 통한 안전한 교통환경 조성

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	10 %	총사업비 (예산확보)	810백만원 (시비 405, 도비 405)
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위    치 : 1호광장 ~ 서울병원 사거리(L : 1.2km)

○ 사 업 량 : 도로구조 개선 1식

○ 사업내용 : 교통신호기 및 교통안전시설 설치, 차로 및 교차로 가각 조정 등

○ 사 업 비 : 총 810백만원(도비 405, 시비 405)

☐ 추진현황

○ 2022.  7. : 교통사고 잦은 곳 개선사업 선정(전남도)

○ 2022. 12. : 기본 개선계획 접수(도로교통공단→목포시)

○ 2023.  1. : 도비 지원계획 확정(도비 405백만원)

○ 2023.  3. : `23년 제1회 추경예산 반영

○ 2023.  4. : 실시설계 착수

○ 2023. 10. : 실시설계 완료 / 관계기관(경찰서, 도로교통공단) 협의

○ 2023. 12. : 공사 계약체결 및 착공

○ 2024.  1. : 공사 일시정지  * 민원 발생 : 일부구간 주정차공간(불법) 축소에 따른 반대

○ 2024.  9. : 공사 일시정지 해제

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2023	공사착공	- 실시설계, 공사착공	달성	5%
2024	사업완료	공사 추진 중	미달성	10%
2025

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	810	-	810	-	-	-
확보액	810	-	810	-	-	-
집행액	810	-	60	750	-	-

☐ 문제점 및 대책 : 해당없음

☐ 향후계획

○ 2024. 11. : 사업 완료

담당부서		건설과장 오병주 도로정비팀장 문정훈 주무관 정경만(☎8645)