기획복지	목포시 공용주차장 건립		담당부서
37
			회계과

(기준일 : `24. 9. 30.)

	최종목표
❖ 청사 주변 공용주차장 건립으로 방문민원인 주차불편 민원해소 ❖ 시청주변 불법주차 근절해소 등 인근 주민에게 주차편의 제공

사업성격	신 규 ● 계 속 ○	추진주체	국 가 ○ 지자체 ●	완료시기	임기내 ● 임기후 ○
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	100%	총사업비 (예산확보)	5,850백만원 (5,850백만원)
추진상황	완료 ● 완료후계속추진 ○ 정상추진 ○ 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 2 ~ 2024. 9.

○ 위    치 : 용당동 1206-1 외 1필지

○ 사 업 량 : 부지 3,500㎡, 주차장 2층(3단) 연면적 5,000㎡(주차 364대⇒499대)

- 기존 주차장 : 364면(본관동 2대, 민원동 77, 의회동 62, 야외 223) *야외 135대 증

○ 사업내용 : 시청사 야외주차장에 공용주차장 건립

○  사 업 비 : 총 5,850백만원(도비 2,500 시비 3,350)

☐ 추진사항

○ ’22.  7.        2023년도 균특전환사업 신청(주차환경개선)

○ ’22. 12.        2023년도 균특전환사업(주차환경개선) 확정(50억)

○ ’22. 12.        사업부지 용당동 1206-1(야외주차장4,405㎡) 소유권 확보

○ ’23. 2. ~ 12.   목포시 공용주차장 주차타워건립 실시설계용역

○ `24.  2.  15   야외주차장 폐쇄 및 공사착수

○ `24.  5.        터파기 공사 및 철골조립 공사 완료

○ `24.  6.       2층 바닥콘크리트 타설(6.4.) 옥상콘크리트 타설(6.30)

○ `24.  7. ~ 9.   건축 마감공사 및 전기․소방․통신․공사 추진

○ `24.  9.  28.   공사준공  ※10.8. 준공식 개최

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	달성여부	누적 진도율
2022	기본계획 및 국가균특 (주차환경개선) 신청	사업확정	달성	10%
2023	사업비 확보 설계용역 및 공사착수	- 사업비 확보 완료 - 설계용역 착수완료 - 공사발주	달성	30%
2024	공사추진 및 준공	2024. 2 ~ 89	달성 (완료)	60%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
예산액	5,850	-	5,000	850	-	-
확보액	5,850	-	5,000	850	-	-
집행액	2,620	-	100	2,520	-	-

☐ 향후 추진 계획

○ 시설물 관리 및 유지보수 지속

담당부서		회계과장 박호빈 청사관리팀장 김광선 주무관 이제만(☎3275)