[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설8급 김선웅 (행 3649)
③정책사업명	서산․온금 재정비 촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역
④선정기준	10억원이상 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2013. 3. 26. ~ 2015. 7. 17.
⑥주요내용	○ 추진배경 : 목포의 대표적인 노후 및 불량주택이 밀집한 서산․온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간 조성을 위한 기반시설 설치에 대한 기본 및 실시설계 용역 ○ 용역개요 - 용 역 명 : 목포 서산․온금 재정비촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역 - 과업위치 : 서산․온금․금화․유달동 일원 - 과업범위 : 388,463㎡(서산․온금 재정비촉진지구 내) - 과업내용 ․ 기반시설(도로, 공원, 주차장 등) 기본 및 실시설계 등 - 용역기간 : 2013. 3. 26. ~ 2015. 7. 17. - 용 역 비 : 1,203백만원

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-15	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김선웅/행3649)
정 책 명	서산․온금 재정비 촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역
사업개요	○ 추진배경 - 노후 및 불량주택이 밀집한 서산․온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간 조성을 위한 기반시설 기본 및 실시설계 용역 ○ 추진기간 : 2013. 3. 26. ~ 2015. 7. 17. ○ 총사업비 : 1,203백만원 ○ 주요내용 - 도로 12개소, 공원 3개소, 녹지 10개소, 주차장 3개소 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 01. 10. : 목포시 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 감사실 실무관 송창헌, 기술감사책임관 이상호, 감사책임관 정병우, 감사실장 송명완 ○ 2013. 01. 31. : 목포시 계약심의위원회 심의 - 관련자 : 회계과 실무관 국혜미, 계장 김의숙, 과장 전몽호, 기획관리국장 김준철 ○ 2013. 03. 26. : 서산․온금 재정비촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역 착수 ※ 용역기간 : 2013. 3. 26. ~ 2014. 6. 25. - 관련자 : 원도심사업과 실무관 김용채, 계장 문상규, 과장 윤인영 ○ 2013. 12. 27. : 기반시설 설계용역 주민설명회 개최 - 관련자 : 원도심사업과 실무관 이인정, 계장 문상규, 과장 윤인영, 도시개발사업단장 김치중 ○ 2014. 06. 13. : 행정절차 이행을 위한 용역 일시정지 - 관련자 : 원도심사업과 실무관 서신우, 계장 문상규, 과장 윤인영 ○ 2014. 06. 20. : 목포시 도시공원위원회 심의 - 관련자 : 공원과 실무관 장복천, 계장 최재혁, 과장 박종학, 도시건설국장 최영학, 부시장 윤진보 ○ 2014. 07. 31. : 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 - 관련자 : 공원과 실무관 장복천, 계장 최재혁, 과장 박종학 ○ 2014. 11. 05. : 전라남도 공공디자인위원회 심의 - 관련자 : 전라남도 경관디자인과 주무관 김태곤, 공공디자인담당 김상규, 과장 박수옥 ○ 2015. 01. 29. : 전라남도 건설기술심의위원회 심의 - 관련자 : 전라남도 지역계획과 주무관 최연호, 지역개발담당 임병율, 과장 변재홍 ○ 2015. 02. 24. : 지방재정 중앙투자심사 조건부 통보(394억) - 관련자 : 기획예산과 실무관 노희진, 계장 이지홍, 과장 김창옥 ○ 2015. 06. 18. : 제1구역 기반시설 조성 실시계획인가 고시 - 관련자 : 도시계획과 책임관 차경희, 계장 김충, 과장 윤인영 ○ 2015. 07. 10. : 행정절차 완료에 따른 용역 일시정지 해제 - 관련자 : 회계과 실무관 최성욱, 계장 정병철, 과장 정병술, 기획관리국장 박소영 ○ 2015. 07. 17. : 서산․온금 재정비촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김방선, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭