[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	이인정 (061-270-3684)
③정책사업명	삼학도 복원화사업 공원조성공사
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2004~2016
⑥주요내용	❐ 사업개요 ○ 목 적 : 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민 휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 위 치 : 산정동 대․중․소삼학도 일원 ○ 사 업 비 : 1,399억원 ○ 사업기간 : 2004. 12. ~ 2016. 12. ○ 사 업 량 : 공원 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등 ❐ 사업추진현황 ○ 2004. 12 : 삼학도 복원화사업 공원조성공사 착수 ○ 2011. 12 : 호안수로 2.1㎞, 산책로 4.2㎞, 교량9개소, 취배수갑문 3개소, 배수로 3.7㎞, 파크골프장 조성 등 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분공장 철거 완료 ○ ‘13. 7. : 중앙공원 조성, 구)한국제분 철거부지 산형태복원 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공, 중앙공원 가로등 설치 완료 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 ○ ‘15. 10. : 중앙공원 생태연못 조성완료

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-12	담당부서 작성자	(도시개발사업단/ 도시재생과) (이인정/270-3684)
정 책 명	삼학도 복원화사업 공원조성공사
사업개요	○ 추진배경 - 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 추진기간 : 2004.12. ~ 2016.12. ○ 총사업비 : 13,9921백만원 ○ 주요내용 - 공원조성 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘00. 4. : 공원변경 결정 및 지적고시(전남도고시 제2000-41호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 5. : 삼학도공원 조성계획 변경결정 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 8. : 남해안 관광벨트개발사업 사업계획 승인 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 실시설계 완료 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 연안정비사업 실시계획 승인(해수부고시 2001-112호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사(토목) 착공 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´04.12 ~ ´06. 6 : 토목 1차 공사 완료(수로 742m, 배수갑문 1개소, 교량 5개소) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´06. 6 ~ ´08. 4 : 토목 2차 공사 완료(호안수로 540m, 교량 1개소) ※ ‘07. 3. : 1차 공사 완료구간 시민 개방 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´09. 2. : 공원조성계획 변경 및 지형도면고시 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 3. : 호안수로 1,458m 전면통수 및 교량4개소, 산책로4.4㎞ 개방 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 5. : 토목공사 3․4차분 준공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ‘11. 3. : 토목 5차분 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘11. 12. : 배수갑문 1개소, 파크골프장 조성, 철도횡단구간 호안수로 연결 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 4. : 구)한국제분 공장 철거공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 8. : 한국제분 사일로 14기 철거(1차 : 8.1일(8기), 2차 : 8.10일(6기)) - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분 공장 철거공사 완료, 중앙공원 조경공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 10. : 대삼학도 절개지 산형태 복원 등 활용계획 방안 검토보고 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 12. : 산형태 복원구간 측량 및 복원공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철 책임관 김명봉, 실무관 진헌민 ○ ‘13. 7. : 중앙공원, 한국제분 철거부지 산형태 복원 등 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘13. 12. : 목포 삼학도선(철도) 폐지 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘14. 5. : 삼학도 공원내 철도 선로 철거 완료(380m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김진현, 실무관 김신주 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 10. : 중앙공원 생태연못 조성완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정

[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	이인정 (061-270-3684)
③정책사업명	도심관통 도로개설
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2008년~2016년
⑥주요내용	○ 추진배경 : 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 사업개요 - 사업명 : 도심관통 도로개설 - 사업위치 : 구)중앙공설시장~7호광장간 - 사업내용 : 도로개설 L=555m, B=20m - 사업기간 : 2008~2016 - 사업비 : 35,600백만원

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-13	담당부서 작성자	(도시개발사업단/ 도시재생과) (이인정/270-3684)
정 책 명	도심관통 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 추진기간 : 2008 ~2016 ○ 총사업비 : 35,600백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=555m, B=20m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘05. 10. 28. : 지방재정투융자 심사(자체) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘06. 04. 18. : 용역과제 사전심의 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘07. 03. 23. : 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 추진 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘07. 11. 27. : 도시관리계획시설 결정(변경) 지형도면 고시 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘08. 05. 27. : 실시계획인가 사전 공람공고(한복거리~백제약국) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박경곤, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘08. 09. : 도시관리계획 시설사업(도로) 실시계획인가 고시 ※ 도로개설 L=555m, 중 1단계 L=165m(1․2구간) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘09. 12. : 보상계획 공고 및 열람(1단계 1차 구간 : L=89m, B=20m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 윤병종, 실무관 민경종 ○ ‘10. 01~12 : 한복거리구간(1차구간) 보상 및 지장물 철거 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘10. 12. : 도시관리계획시설사업(도로) 실시계획인가(변경)고시 ※ 사업기간 연장 : ‘10. 12. 31. → ‘14. 12.31. - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘13. 7. ~ 12월 : 2차구간(L=76m) 65억원(보상49, 공사16)중 보상비 39억원(백제약국 10억원 제외) 3회 분할지급(13년 8억원 보상) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 김진희 ○ ‘14. 01. : 2구간 16필지 분할보상금 2차분 지급 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 정대균 ○ ‘14. 12. : 국비 특별교부세 확보(10억) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김재성 실무관 김형중 ○ ‘15. 02. : 2구간 분할보상금 3차분 지급완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 09. : 2구간 지장물 철거 완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 11. : 2구간 지장물(백제약국) 철거 추진중 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정