[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

교통행정과

②담당자

(전화번호)

박철우

270-8294

③정책사업명

목포/무안/영암/신안 광역버스정보시스템(BIS) 구축

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업

⑤사업기간

′15. 4~′16. 9

⑥주요내용

■ 사업기간 : ′15. 4~ ′16. 9

■ 사업예산 : 1,334백만원(국비 400, 도비 400, 시·군비 534)

■ 사업범위 : 목포, 무안, 영암, 신안 등 4개 시·군 주요 간선도로

■ 사 업 량

사 업 내 용		합 계	목 포	무 안	영 암	신 안	비 고
현 장 부 문	정류소안내기	58식	24식	18식	9식	7식
	차량단말기	89식	-	20식	29식	40식
센 터 부 문	센터시스템	1식	1식	1식	1식	1식
	응용 S/W (연계, 개선)	1식	1식	1식	1식	1식
기 타	기 본 설 계	1식	1식	1식	1식	1식
	사 업 관 리	1식	1식	1식	1식	1식

■ 사업내용

- 운행중인 버스의 실시간 위치, 운행상태 등의 정보수집

- 승강장에 설치된 단말기를 통한 버스의 출발, 도착,

배차시간 제공

■ 향후 사업 추진계획

- ′15. 4. : 광역BIS 구축사업(관리용역) 계약심사, 일상감사 이행

- ′15. 5. : 2015 광역BIS 구축사업(관리용역) 계약 의뢰

- ′15. 8 ~9. : 2015 광역BIS 구축사업 일상감사 및 계약심의

- ′15. 9. : 2015 광역BIS 구축사업 조달 계약 의뢰

- ′15. 11. ~ 2016. 9. : 사업 추진 및 시험운영, 준공

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제 등록번호	3	담당부서 작성자	도시건설국 / 교통행정과 박철우/270-8294
정 책 명	목포/무안/영암/신안 광역버스정보시스템(BIS) 구축
사업개요	○ 추진배경 - 수도권, 대도시를 비롯한 전남도내 동남권의 경우 BIS사업이 활발히 추진되고 있으나, 서남권(목포·무안·영암·신안)은 서비스 기반 미약 - 버스운행관리 정보제공을 통해 시민들의 버스 정시도착 기대에 부응하여 이용율 증가 및 버스운영자 경영적자 해소에도 기여 ○ 추진기간 : 2015. 4 ~ 2016. 9 ○ 총사업비 : 1,334백만원(목포413, 무안402, 영암265, 신안 254) ○ 주요내용 - 정류소안내기 58대, 차량단말기 89대, 센터 개선 1식
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○′15. 2. : 2015 광역BIS 최종 사업계획서 국토교통부 제출 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 국고보조금 교부 결정 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업 추진 4개 시·군 행정협의체 구성 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업 협정서 체결 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 3. : 2015 광역BIS 구축사업(관리용역) 용역과제 사전심의 이행 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 4. : 2015 광역BIS 구축사업 계약심사 및 일상감사 의뢰 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 7~ 8. : 2015 광역BIS 구축사업 일상감사 및 계약심의회 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 9~ 11. : 2015 광역BIS 구축사업 조달계약의뢰(사전규격평가 및 공고) - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 12. : 2015 광역BIS 구축사업 조달계약 체결 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′15. 12. : 2015 광역BIS 구축사업 착수 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우 ○′16. 01. : 2015 광역BIS 구축사업 선급금 지급 - 교통행정과 과장 박경연, 담당 박철우