[별지 제1호서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정성훈 하수과장 권장주 (061-270-8627)
③정책사업명	상하수도(북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업) 2016-8
④선정기준	10억원 이상 건설사업	⑤사업기간	2012년~2017년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 북항 하수종말처리시설의 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수로 공공수역 수질 개선 - 위 치 : 북항하수처리시설 내 - 사업비 : 10,601백만원(국비 5,301, 도비 225, 시비 5,075) - 사업기간 : 2012년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 고도처리 Q=35,000㎥/일 ○ 사업추진현황 - ‘10. 5. 6. : 지방재정 투․융자 심사 완료 - ‘12. 5. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 - ‘14. 2. 25. : 공법 2차평가 완료 - ‘14. 6. 10 : 목포시 건설기술심의 - ‘14. 9. 16 : 설계자문(전남도) 및 재원협의(영산강청) - ‘14. 12. 8 : 총사업비 변경 승인(7,944백만원→10,601백만원) - ‘14. 12. 16 : 실시설계 용역 준공 - ‘14. 12. 18 : 공공하수도 설치(변경) 인가 - ‘15. 2. 2 : 전라남도 계약심사 - ‘15. 4. 3 : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 4. 13 : 목포시 일상감사 - ‘15. 7. 21 : 공사계약 의뢰 - ‘15. 11. 20 : 총괄분 및 1차분 착공 - ‘16. 4. 29 : 2차분 착공 - ‘16. 6. 14 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공

[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-08	담당부서 작성자	(상하수도사업단 / 하수과) (정성훈/061-270-8627)
정 책 명	북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 북항 하수종말처리시설의 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수로 공공수역 수질개선 ○ 추진기간 : 2012 ~ 2017 ○ 총사업비 : 10,601백만원 ○ 주요내용 : 고도처리 Q=35,000㎥/일
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 12. 3. 13 : 고도처리 추진계획 보고 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 12. 5. 25 : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 14. 6. 10 : 목포시 건설기술심의 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 14. 9. 16 : 설계자문(전라남도) 및 재원협의(영산강청) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 16 : 기본 및 실시설계용역 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 18 : 공공하수도 설치(변경) 인가 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 2. 2 : 전라남도 계약심사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 3 : 목포시 계약심사위원회 심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 13 : 목포시 일상감사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 20 : 목포시 일상감사(전기 및 계측제어) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 11. 20 : 총괄분 및 1차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 16. 4. 29 : 2차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 4. 29 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주